【 붙임5 】

청계면사무소 청사 신축사업

- 단계 : 준공 -

세무회계과, 최문수, 450-5382

일반 현황	소 재 지	무안군 청계면 도림리 496번지
	인구 수	착공일	준공일
		6,367명(2020.12.29.기준)	6,290명(2022.3.30.기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		18명 / 18명	18명 / 18명
	재정자립도	착공일	준공일
		11.77%	11.77%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	본청/의회/기타	1977				1,644			-			681		1/2
	:	-				-			-			-		-
	청사신축 필요성			노후화 및 협소한 공간으로 인하여 복합용도로서의 기능 필요
	사업기간			2020. 12. ~ 2022. 3.(1년 3개월)
	사업수행방식			설계･시공 일괄 : X 설계･시공 분리 : O
	추정(예정)가격			4,410백만원				계약금액			4,007백만원				낙찰율		87.745%
	청사 규모
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	본청/의회/기타		2022		4,284		-			1,372			0/2
	:

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	6,299						6,299
	Y-3 이전	779						779
	Y-2	3,720						3,720
	Y-1	1,800						1,800
	준공연도(Y)
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비		650				336				비고
	2) 설계비		129
	3) 감리비						48		47
	4) 공사비				500		2,931		1,121
	5) 기타부대비				181		43		109

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	타당성 조사	2019. 02.	적정	자체
	공유재산 관리계획	2019. 03.	완료	군의회
	투융자심사	2019. 06.	완료	전라남도
	중기재정계획	2019. 09.	반영	자체
	설계	2020. 10.	완료	자체
	착공	2020. 12.	착공	자체
	준공	2022. 03.	준공	자체

2. 공종별 공사비 현황

(부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액ㆍ비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	4,552,400,350
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
건축, 토목, 조경, 기계 설비(철거포함)	금액(원)	3,681,168,760	사무실, 민원실, 상담실, 전산실, 임산부휴게실, 미화요원 휴게실, 회의실, 다목적실, 면장실 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
건설폐기물처리비	금액(원)	161,010,000
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
석면철거 공사	금액(원)	20,304,000
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
지정폐기물처리비	금액(원)	6,519,000
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
전 기	금액(원)	475,681,240
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
통 신	금액(원)	153,846,120
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
소 방	금액(원)	53,871,230
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)