【별지 5】 10-1-1. 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

무안군 청계면사무소 신청사 건립

담당자

세무회계과 윤영호(☎450-5409)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건립된지 40여년의 경과로 노후화 및 협소한 공간으로 시설개선 필요성

○ 군민 서비스 기능화 일반 행정역량 강화 및 군정업무 수행 생산성 제고

□ 사업개요

○ 기   간: 2019. 9. ~ 2022. 9.

○ 위   치: 무안군 청계면 도림리 489-5번지 외 16필지

○ 규   모: 지상2층, 연면적 1,372.14㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,600	5,492	108	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,600	5,492	108	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ 청계면사무소 사업 완료

□ 향후계획

○ 하자보수 및 유지관리

사업명

남악 청소년 문화의 집 건립

담당자

주민생활과 김아랑(☎450-5531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 청소년 문화시설에 대한 수요 대응 및 청소년 권리 증진

○ 21세기 청소년 글로벌 역량 강화를 위한 다양한 체험활동 및 인성교육·품성개발을 위한 교육환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간: 2020년~2023년

○ 위    치: 무안군 삼향읍 남악리 1499번지

○ 규    모: 지상3층(부지6,663m2, 연면적1,326.44m2, 건축면적 888.63m2)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,961백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,961	2,080	1,675	2,206	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,040	1,600	300	1,140	-
시군구비	2,921	480	1,375	1,066	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

○ 착공준비 및 착공승인 : 2021.12.~2022.02.

○ 가설공사 및 지하터파기 : 2022.02.~2023.07.

○ 철근콘크리트 공사 : 2022.07.~2023.02.

□ 향후계획

○ 조적공사 및 지붕공사 : 2023.02.~2023.06.

○ 창호공사 및 우수오수 관로공사 : 2023.03.~2023.07.

○ 내부 목공사 및 수장공사 : 2023.04.~2023.08.

○ 잔손보기 및 완공 : 2023.08.~2023.09.(예정)

□ 사업변경 내역

○ 남악 청소년 문화의 집 설계변경 및 물가변동 등으로 사업비 1,861백만원 증액

사 업 비(단위: 백만원)						비고
당초			변경
계	도	군	계	도	군
3,800	3,040	760	5,961	3,040	2,921

사업명

남악신도시 체육시설 확충사업

담당자

문화체육과 양화영(☎450-4097)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시 내 체육시설 확충으로 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기    간: 2018년 ~ 2025년

○ 위    치: 무안군 삼향읍 남악리 2598번지

○ 규    모: (연면적) 8,210㎡, 지하1층 ~ 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 35,400백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	35,400	7,539	560	500	26,801
국 비	2,860	75	52	150	2,583
시 도 비	5,400				5,400
시군구비	27,140	7,464	508	350	18,818

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 5%)

○ 설계공모 및 설계용역 착수      : ’21.  6.

○ 원가심사 및 계약심사 완료      : ’23.  3.

□ 향후계획

○ 공사 착수                      : ’23. 10.

○ 공사 완료                      : ’25. 12.

사업명

다목적체육관 건립사업

담당자

문화체육과 양화영(☎450-4097)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설 확충으로 전국대회·전지훈련팀 유치 경쟁력 향상 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기    간:  2020년 ~ 2025년

○ 위    치: 무안군 현경면 양학리 1165번지

○ 규    모: (연면적) 6,454㎡, 지하1층 ~ 4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 19,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,900	473	443	7,022	11,962
국 비	5,400	117	133	2,108	3,042
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	14,500	356	310	4,914	8,920

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 6%)

○ 설계공모 및  설계용역 착수      : ’21.  6.

○ 건설기술심의 완료               : ’23.  3.

○ 원가심사 및 계약심사 완료       : ’23.  4.

□ 향후계획

○ 공사 착수                       : ’23. 12.

○ 공사 완료                       : ’25.  3.

사업명

무안연꽃축제

담당자

관광과 이수정(☎450-5472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 회산백련지를 배경으로 볼거리, 즐길거리, 먹거리가 풍성한 매력있는 축제를 개최하고 대내외 우리군의 아름다운 생태 관광자원 홍보

○ 지역 브랜드 가치 제고를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간: 2022. 7. 21 ~ 7. 24.

○ 위    치: 무안군 일로읍 회산백련지 일원

○ 규    모: 축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	700	-	700	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	700	-	700	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도:  100%)

○ 축제개최: 2022. 7. 21. ~ 7. 24.

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

무안군 해제면 도리포 관광명소화 사업

담당자

관광과 이창언(☎450-5477)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠산대교 개통에 따른 관광객 증대에 대비, 도리포 및 송계어촌체험마을     일원의 관광자원을 효과적으로 연계하여 무안군 대표 해양관광 거점으로    육성

□ 사업개요

○ 기    간: 2021. ~ 2025.

○ 위    치: 전남 무안군 해제면 송석리 30-5번지 일원

○ 규    모: 67,343㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 15,100백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,100	4,400	1,000	1,600	8,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,550	200	500	800	4,050
시군구비	9,550	4,200	500	800	4,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료   : ’19.  6.

○ 공유재산 심의 완료                      : ’20.  2.

○ 지방재정 투자심사 의결(전남도)           : ’20. 10.

○ 사업대상부지 매입                       : ’20. 12.

○ 건축 실시설계 용역 착수                 : ’22.  1.

○ 토목 실시설계 용역 착수                 : ’22.  6.

○ 건축 실시설계 완료 및 공사 발주         : ’23.  6.

□ 향후계획

○ 토목 실시설계 및 행정절차 완료          : ’23. 12.

○ 토목사업 추진                           : ’24.  1. ~ ‘25. 12.

□ 사업변경 내역

○  사업기간: (당초) 2021. ~ 2023. (변경) 2021. ~ 2025.

사업명

우적동 천주교 순례지 명소화

담당자

관광과 이창언(☎450-5477)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 관내에 위치한 호남 최초의 신부 묘소(이내수 신부)와 아름다운      자연경관을 접목하여 천주교 순례지를 방문하는 관광객에게 힐링공간을     제공하고 관광객 유입과 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기    간: 2024. ~ 2026.

○ 위    치: 전남 무안군 몽탄면 사천리 산94번지 일원

○ 규    모: 25,750㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,690백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,690	-	890	-	4,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,400	-	-	-	2,400
시군구비	3,290	-	890	-	2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

○ 기본계획 및 타당성조사 용역 완료      : ’21.  9.

○ 중기지방재정계획 반영                 : ’21. 11.

○ 지방재정 투자심사 완료                : ’22.  3.

○ 공유재산 심의 완료                    : ’22.  3.

○ 사업대상부지 매입                     : ’22.  6.

○ ’24년 지방자치단체 전환사업 예산 신청 : ’23.  6.

□ 향후계획

○ 실시설계 및 행정절차 완료 : ’24. 1. ~ 12.

○ 사업 추진                 : ’25. 1. ~

□ 사업변경 내역

○ 사업기간: (당초) 2021. ~ 2025. (변경) 2024. ~ 2026.

사업명

영산강 관광경관 개선사업

담당자

관광과 이창언(☎450-5477)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강 강변도로 개통과 연계하여 석정포 ~ 식영정, 느러지마을의 관광      경관을 개선하고 시설기반을 정비하여 수변생태공원을 조성으로 볼거리,    쉴거리 제공

□ 사업개요

○ 기    간: 2021. ~ 2025.

○ 위    치: 전남 무안군 몽강리 628번지 일원

○ 규    모: 262,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 3,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	200	400	-	2,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,800	100	200	-	1,300
시군구비	1,800	100	200	-	1,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 20%)

○ 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 : ’21. 12.

○ 실시설계 용역 착수               : ’21. 12.

○ 공유재산 심의 완료               : ’22.  3.

○ 지방재정 투자심사(자체) 완료     : ’22. 11.

○ 소규모 환경영향평가 용역 착수    : ’22. 11.

○ 사업대상부지 매입                : ’23.  5.

□ 향후계획

○ 실시설계 및 행정절차 완료        : ’23.  9.

○ 사업 추진                        : ’23. 10. ~ ’25. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간: (당초) 2022. ~ 2024. (변경) 2021. ~ 2025.

사업명

무안군 음식물류폐기물

공공처리시설 확충사업

담당자

환경과 박신우(☎450-5573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물 소각시설 용량대비 초과반입으로 인하여 음식물류 폐기물을
소각(12톤/일), 매립(17톤/일)을 하고 있는 실정임.

○ 또한 오룡지구의 입주 및 개발로 음식물류폐기물 발생량이 증가 예상되어
공공처리시설의 확충이 시급

□ 사업개요

○ 기    간: 2020. 1. ~ 2025. 12.

○ 위    치: 전남 무안군 성동리 56-8번지 일원

○ 규    모: 바이오가스화 40톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 13,840백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,840	24	550	2,000	11,266
국 비	4,152	7	281	600	3,264
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,688	17	269	1,400	8,002

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 7%)

○ 음식물류 폐기물 처리시설 타당성 조사 용역 완료 : ’17. 12.

○ 지방재정 투자심사 (조건부)                      : ’20. 10.

○ 일상감사 및 도계약심사 등 추진                 : ’21.  6. ~ 11.

○ 소규모환경영향평가 추진                        : ’21. 10.

○ 기본 및 실시설계 추진(공법선정 완료)            : ’22. 11. ~ ’23.  6.

□ 향후계획

○ 설계안전성, VE, 적정성 평가 추진                : ’23. 10.

○ 환경부 재원협의                                 : ’23. 11.

○ 공사발주                                        : ’23. 12.

사업명

중부권환경클린센터 건립

담당자

환경과 조가영(☎450-5552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소행정력(인력, 차량) 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간: 2020. 3. ~

○ 위    치: 무안읍 성동리 5, 57

○ 규    모: 대지면적 2,660㎡, 건축물 754.86㎡(2층)

○ 사업내용(주요시설)

- 공공업무시설(종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기단속본부 등)

- 청소업무 종사자 휴게실: 대기실, 체력단련실, 세탁실 등

- 청소차량 차고지: 세차시설, 주차장, 창고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,342백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,342	190	40	854	1,258
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,842	190	40	854	758
기 타	500	-	-	-	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

○ 공유재산 관리계획 수립

○ 타당성 및 기본계획 수립

○ 무안군 건축위원회 심의(공공건축심의) 완료

○ 군 관리계획(공공청사) 결정(변경) 완료

○ 실시설계 계약

○ BF예비인증 및 전남도 공공디자인 심의

○ 건축인허가 접수

○ 문화재 시굴조사 : ‘23.  6.

□ 향후계획

○ 문화재 발굴조사 : ’23.  8.

○ 공사 발주       : ’23. 10.

사업명

서부권 환경클린센터 건립

담당자

환경과 조가영(☎450-5552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소행정력(인력, 차량) 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간: 2020. 3. ~

○ 위    치: 현경면 용정리 563, 566, 569

○ 규    모: 대지면적 4,902㎡, 건축물 743㎡(2층)

○ 사업내용(주요시설)

- 공공업무시설(종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기단속본부 등)

- 청소업무 종사자 휴게실: 대기실, 체력단련실, 세탁실 등

- 청소차량 차고지: 세차시설, 주차장, 창고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,600	180	50	875	1,495
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	180	50	875	1,495

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

○ 공유재산 관리계획 수립

○ 타당성 및 기본계획 수립

○ 무안군 건축위원회 심의(공공건축심의) 완료

○ 군 관리계획(공공청사) 결정(변경) 완료

○ 실시설계 계약

○ BF예비인증 및 전남도 공공디자인 심의

○ 건축인허가 접수

□ 향후계획

○ 진입로 부지확보  : ’23. 8.

○ 공사 발주        : ’23. 9.

사업명

톱머리 해수욕장 관광명소화

담당자

관광과 이창언(☎450-5477)

□ 사업목적 및 필요성

○ 톱머리 해수욕장의 장점인 무안국제공항 및 무안CC를 연계한 국내외 관광객 유입효과를 극대화하고, 관광시설물 조성을 통해 무안군의 해양관광 경쟁력을 강화하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간: 2021. ~ 2025.

○ 위    치: 전남 무안군 망운면 피서리 일원

○ 규    모: 48,351㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 8,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,500	1,500	400	1,000	5,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,500	-	200	500	2,800
시군구비	5,000	1,500	200	500	2,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

○ 지방재정 투자심사 의결(전남도)         : ’21.  5.

○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료  : ’21.  8.

○ 공유재산 심의 완료                     : ’21.  9.

○ 사업대상부지 매입                      : ’21. 12.

○ 실시설계 용역 착수                     : ’22.  6.

□ 향후계획

○ 주차장 실시설계 완료 및 공사 발주      : ’23.  7.

○ 실시설계 및 행정절차 완료              : ’23. 12.

○ 사업 추진                              : ’24.  1. ~ ‘25. 12.

사업명

회산백련지 수목원 조성사업

담당자

산림공원과 이정민(☎450-5592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 빼어난 경관 자원인 회산백련지 매력을 극대화하고 지역민과 함께 새로운 확장과 도약 콘텐츠 필요

○ 영산강 국가 하천 하류에 있으면서 서남권 지역 거점 수목원으로 오룡산 및 승달산, 유달산 등 자생하는 중요 식물 자원 보존 필요

○ 영산강 및 내륙 수변 다양한 수목유전자원의 보존 및 자원화를 촉진시키고 관찰 및 체험 교육을 통해 힐링 할 수 있는 주민 생활밀착형 수목원 조성

□ 사업개요

○ 기    간:  2021. 7. ~ 2026. 12.

○ 위    치: 무안군 일로읍 백련로 333(회산백련지)

○ 규    모: 50ha

○ 내    용: 방문자센터, 전시온실, 습지원, 테마정원, 숲정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	-	-	400	4,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,900	-	-	200	2,050
시군구비	2,900	-	-	200	2,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

○ 20년 수목원 조성 사업 사전 심의 제출       : ‘20.  3. 13.

○ 20년 수목원 조성 사전 심의 확정            : ‘20.  6.  8.

○ 예산 확보 국회의원실 및 전남도 방문 설명   : ‘20. 11. ~ ’22.  3.

○ 실시설계 행정절차 추진 및 관계기관 협의    : ‘22.  1. ~ ’22. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진                 : ‘22. 12. ~ ’23. 12.

□ 향후계획

○ 회산백련지 수목원 조성사업 주민설명회      : ‘23.  9.

○ 계약심사 및 일상감사 추진                  : ‘23. 12.

○ 수목원 조성 사업 추진                      : ‘24.  1. ~ ’26. 12.

사업명

성동지 산림공원 조성사업

담당자

산림공원과 김대수(☎450-5589)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도·농복합도시 무안의 농촌형 모델숲 개발로 정주환경 개선 및 지역 산림
관광자원과 연계 운영을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간: 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위    치: 무안군 무안읍 성동리 산45-141임 등 83필지

○ 규    모: 129,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 7,895백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,100	400	1,700	700	4,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	-	350	2,150
시군구비	4,600	400	1,700	350	2,150

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 29.6%)

○ 기본계획 수립                     : ’20. 1.

○ 관계기관협의 및 공유재산 심의 완료     : ’20. 4.

○ ‘22년 균특전환(산림공원) 예산 확정      : ’21. 6.

○ 편입토지 보상 시행(보상율 82.9%)   : ’21. 8. ~ 현재

□ 향후계획

○ 예산 확보를 위한 관계기관 협의     : ’23. 1. ~ 12.

○ 성동지 산림공원 조성사업 시행      : ’24. 1. ~ 12.

사업명

무안 항공특화산업단지 조성사업

담당자

지역경제과 최현성(☎450-5803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안국제공항을 중심으로 선진국형 지식기반산업인 항공정비산업 및 항공연관

산업을 지역특화 선도산업으로 육성하여 공항 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간: 2018년 ~ 2023년

○ 위    치: 무안군 망운면 피서리 일원

○ 규    모: 350,688㎡(산업시설용지 274,130㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 44,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	44,800	28,302	6,507	9,991	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,800	28,302	6,507	9,991	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 80%)

○ 기본 및 실시계획용역 등 관련 용역 시행                  : ’18.  6.

○ 공유재산관리계획, 지방재정투자심사 승인                 : ’18.  8.

○ 투자기업 선정 및 협약 체결                              : ’19.  4.

○ 편입토지 및 지장물 감정평가 및 보상 시행                : ’19.  5.

○ 산업입지정책심의회 산업단지 지정계획 반영 / 국토교통부  : ’19.  6.

○ 지역산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 / 전라남도      : ’20.  6.

○ 공사착공                                                : ’20. 11.

○ 건설사업관리용역 착수                                   : ’21.  3.

○ 문화재발굴조사용역 완료                                 : ’21.  5.

○ 지방(도)토지수용위원회 재결신청                          : ’21.  7.

○ 서해지방해양경찰청 분양 계약대금 납부                   : ’21.  8.

○ 공항개발사업 실시계획 승인                              : ’21. 10.

○ 리투아니아(Avia Solution Grop) 방문                      : ’22. 11.

○ 한국농수산식품유통공사(aT) MOU 체결                    : ’22. 12.

□ 향후계획

○ 설계변경 시행                    : ’23.  6.

○ 산업단지계획 변경 시행           : ’23.  6.

○ 산업단지 준공                    : ’23. 11.

사업명

삼향농공단지 복합문화센터 건립

담당자

지역경제과 정수인(☎450-5758)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 농공단지 근로자들의 열악한 근무여건을 개선하여 근로자 삶의 질을 높이고 청년층의 농공단지 내 기업 취업을 유도하고자 함.

□ 사업개요

○ 기    간: 2022. 6. ~ 2025. 6.

○ 위    치: 무안군 삼향읍 지산리 894-1번지

○ 규    모: 대지면적 5,021㎡ / 건축연면적 1,290㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,030백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,030	-	421	1,945	1,664
국 비	2,700	-	-	1,600	1,100
시 도 비	345	-	-	345
시군구비	985	-	421	-	564

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

○ 한국산업단지공단 환경조성사업 공모 신청 : ’22.  4.

○ 복합문화센터 건립사업 공모 선정         : ’22.  6.

○ 건설공사 기본계획 수립                  : ’22. 10.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수              : ’23.  3.

□ 향후계획

○ 공사 착수                               : ’23. 11.

○ 공사 완료 및 정산                       : ’25.  6.

사업명

무안 화물자동차 공영차고지 조성

담당자

건설교통과 양동해 (☎450-5678)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안군 내 화물자동차 불법주정차로 인한 주차난을 해소하고 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

○ 화물자동차 운전자 편의 증진 제공

□ 사업개요

○ 기    간: 2020. 1. ~ 2025. 12.

○ 위    치: 일로읍 용산리 1368번지 일원

○ 규    모: (매입) 67,303㎡ / (조성) 35,000㎡ *단계적으로 확대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 10,300백만원(도비 7,21070%, 군비 3,09030%)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,300	31	66	649	9,554
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,188	-	65	435	6,688
시군구비	3,112	31	1	214	2,866

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

○ 화물자동차 공영차고지 타당성조사 완료              : ’20. 7.

○ 군관리계획(재정비) 용역 착수                        : ’22. 6.~

○ 화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 착수       : ’22. 9.~

○ 보상계획 열람공고 일간지 게재                      : ’22. 10.

○ 화물자동차 공영차고지 조성사업 문화재지표조사 완료 : ’22. 12.

○ 토지감정평가 완료                                  : ‘22. 12.

□ 향후계획

○ 화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 완료       : ’23. 9.

○ 화물자동차 공영차고지 조성사업 편입토지 보상 시행  : ’23. 9.~

사업명

도리포항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 김지수 (☎450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기    간: 2020년~2023년(3년)

○ 위    치: 무안군 해제면 송석리 일원(도리포항)

○ 규   모: 물양장공 100m, 해수소통구 78m, PE부잔교 190m, 마을회관 리모델링, 야외쉼터정비, 어부마켓 신설, S/W사업(지역리더 양성교육, 선진지견학 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 12,548백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,548	8,248	4,300	-	-
국 비	8,784	5,774	3,010	-	-
시 도 비	1,129	742	387	-	-
시군구비	2,635	1,732	903	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 90%)

○ 도리포항 어촌뉴딜사업 선정      : ’19. 12.

○ 기본계획 수립고시               : ’20. 12.

○ 생활 SOC 사업 시행 승인        : ’21.  4.

○ 공유수면 점·사용 실시계획 승인 : ’21. 12.

○ 어촌뉴딜 시행계획 승인          : ’22.  5.

○ 어촌뉴딜 공통사업 부분준공      : ’22. 12.

□ 향후계획

○ 공통사업 공사 준공              : ’23.  9.

○ 공통사업 및 특화사업 준공       : ’23. 12.

사업명

송현항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 김지수 (☎450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기    간: 2020년~2023년(4년)

○ 위    치: 무안군 망운면 송현리 일원(송현항)

○ 규    모: 선착장 연장 L=10m, 선착장 증고 L=180m, 방파제 연장 L=10m,
부잔교 30m, 대합실 설치, 다목적센터 건립, 어민쉼터 건립,
마을정비 1식, 주차장 설치, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 11,555백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,555	7,602	3,953	-	-
국 비	8,089	5,322	2,767	-	-
시 도 비	1,040	684	356	-	-
시군구비	2,426	1,596	830	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 90%)

○ 기본계획 고시                     : ’20. 11.

○ 공유수면 점·사용 실시계획 승인   : ’21.  5.

○ 공통사업 시설공사 착공            : ’21. 10.

○ 특화사업 시설공사, 건축공사 착공   : ’21. 11.

○ 특화사업 시설공사, 건축공사 준공   : ’23.  1.

□ 향후계획

○ 공통사업 선착장 정비공사 준공      : ’23. 12.

○ S/W 사업 준공                      : ’23. 12.

사업명

영해항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 김지수 (☎450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기    간: 2020년~2023년(4년)

○ 위    치: 무안군 운남면 동암리 일원(영해항)

○ 규    모: 방파제 연장 L=30m, 피항시설 신설 L=110m, 부잔교 연장 및 신설 L=80m,
마을회관 리모델링, 영해공원 재정비, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,594백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,594	3,728	1,866	-	-
국 비	3,916	2,609	1,306	-	-
시 도 비	503	336	168	-	-
시군구비	1,175	783	392	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 95%)

○ 기본계획 고시                           : ’20. 11.

○ 간이해역이용협의, 공유수면 점·사용승인 : ’21.  5.

○ 공통사업 시설공사 착공                  : ’21. 11.

○ 특화사업 시설공사 착공                  : ’22.  6.

○ 공통사업 시설공사(토목) 준공             : ’22. 12.

□ 향후계획

○ 시행계획 수립                          : ’23.  8.

○ 영해항 어촌뉴딜 S/W사업 준공           : ’23.  9.

○ 영해항 어촌뉴딜 총괄준공               : ’23. 12.

사업명

닭머리항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 김지수 (☎450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기    간: 2020년~2023년(4년)

○ 위    치: 무안군 해제면 대사리 일원(닭머리항)

○ 규    모: 방파제 L=100m, 물양장 L=35m, 부잔교 2개소, 크레인 2개소,
어민회관 건립, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 7,581백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,581	5,019	2,562	-	-
국 비	5,307	3,513	1,793	-	-
시 도 비	682	452	231	-	-
시군구비	1,592	1,054	538	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 85%)

○ 기본계획 고시                    : ’20. 12.

○ 생활SOC 시행계획 협의           : ’21.  4.

○ 공통사업 토목공사 착공           : ’21.  6.

○ 공유수면 점·사용 실시계획 승인  : ’21. 12.

○ 시행계획 고시                    : ’22.  9.

○ 공통사업 토목공사 준공           : ’22. 12.

□ 향후계획

○ 특화사업 준공                    : ’23.  9.

○ 영해항 어촌뉴딜 총괄준공         : ’23. 12.

사업명

월두항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 김지수 (☎450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기    간: 2020년~2023년(4년)

○ 위    치: 무안군 현경면 용정리 일원(월두항)

○ 규    모: 방파제 L=70m, 안전시설 설치 L=400m, 어장진입로 조성 L=700m,
부잔교 증설 A=144m2, 진입로 정비, 어울림센터 신축, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 6,248백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,248	1,249	2,499	2,499	-
국 비	4,374	875	1,749	1,749	-
시 도 비	562	112	225	225	-
시군구비	1,312	262	525	525	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

○ 기본계획 고시                    : ’21. 12.

○ 공통사업 시행계획 협의           : ’22.  5.

○ 해역이용협의 조건부 승인         : ’23.  1.

○ 공유수면 점·사용 허가 승인      : ’23.  2.

□ 향후계획

○ 특화사업 세부설계 완료           : ’23.  9.

○ 특화사업 공사 착공               : ’23. 11.

○ 공통사업 공사 준공               : ’23. 12.

○ 특화사업 공사 준공 및 사업 완료  : ’24.  6.

사업명

장재항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 김지수 (☎450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2024년(3년)

○ 위 치 : 무안군 망운면 목서리 일원(장재항)

○ 규 모 : 물양장 확충 A=1,185m2, 신설 선착장 L=130m, 어항진입로 증고, 다목적 커뮤니티센터 건립, 해안마을 경관정비, 노을길 복합어민쉼터 건립, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅, 지역협의체 운영)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 9,166백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,166	-	1,375	3,300	4,491
국 비	6,416	-	962	2,310	3,144
시 도 비	825	-	124	297	404
시군구비	1,925	-	289	693	943

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 25%)

○ 장재항 어촌뉴딜사업 선정        : ’21. 12.

○ 기본계획 착수                   : ’22.  4.

○ 공통사업 기본 및 실시설계 착수  : ’22.  7.

○ 기본계획 고시                   : ’23.  2.

○ 일반해역이용협의 승인           : ’23.  4.

○ 특화사업 세부설계용역 착수      : ’23.  5.

□ 향후계획

○ 공통사업 공사 착공              : ’23.  8.

○ 특화사업 세부설계용역 완료      : ’23. 11.

○ 특화사업 공사 착공              : ’24.  2.

○ 공통사업 및 특화사업 준공       : ’24. 12.

사업명

탄도항 어촌뉴딜 기항지개선사업

담당자

해양수산과 김지수 (☎450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기    간: 2022년~2024년(3년)

○ 위    치: 무안군 망운면 탄도리 일원(탄도항)

○ 규    모: 선착장 연장 L=70m, 부잔교 L=100m, 신월항 대합실 A=160m2,
탄도항 대합실 A=66m2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,554백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,554	-	683	1,640	2,231
국 비	3,188	-	478	1,148	1,562
시 도 비	410	-	62	148	201
시군구비	956	-	143	344	468

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 15% )

○ 탄도항 어촌뉴딜사업 선정              : ’21. 12.

○ 기항지개선사업 기본 및 실시설계 착수  : ’22.  5.

○ 기항지개선사업 기본 및 실시설계 준공  : ’23.  7.

○ 시행계획 고시                         : ’23.  8.

□ 향후계획

○ 기항지개선사업 공사 착공              : ’23.  9.

○ 기항지개선사업 공사 준공              : ’24. 12.

사업명

무안 복합문화센터 건립공사

담당자

지역개발과 임철훈(☎450-5780)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악 신도시에 집중되는 문화시설에 대응하여 원도심 기능회복

○ 복합문화공간을 조성하여 주민편익 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간:  2021. 7. 26. ~ 2023. 11. 30.

○ 위    치: 전라남도 무안군 무안읍 성남리 812-13 외 2필지

○ 규    모: 지하 2층, 지상 6층(16,027.30㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 35,108 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	35,108	14,615	5,275	15,218	-
국 비	10,100	6,200	2,160	1,740	-
시 도 비	5,850	1,300	900	3,650	-
시군구비	17,658	7,115	2,215	8,328	-
기 타	1,500	-	-	1,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 66.55%)

○ 전체공정 66.55%

○ 지하층 배수판 설치 및 무근 콘크리트 타설

○ 2층 문틀(FSD, SSD) 시공

○ 3층, 4층 비드시공 및 조적공사

○ 6층 비계설치 및 골조공사 중

○ DA시공 완료

□ 향후계획

○ 골조공사 마무리  : ’23.  8.

○ 공사 준공        : ’23. 11.

□ 사업변경 내역

○ 준공일 변경(당초-2023년 7월 15일, 변경-2023년 11월 30일)

사업명

농업근로자 기숙사 건립사업

담당자

농정과 김현우(☎450-4075)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업근로자들의 정주 여건을 개선하여 농번기철 부족한 농업인력 수급

□ 사업개요

○ 기    간: 2022. ~ 2023.

○ 위    치: 현경면 외반리 499-4

○ 규    모: 지하 1층, 지상3층 / 건축면적 310㎡, 연면적 892.16㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 3,160백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,160	-	293	1,500	1,367
국 비	818	-	68	375	375
시 도 비	225	-	-	112.5	112.5
시군구비	2,117	-	225	1,012.5	879.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

○ 농업근로자 기숙사 설계 용역 완료              : ’23. 7.

○ 농업근로자 기숙사 건립사업 전라남도 계약심사  : ’23. 8.

□ 향후계획

○ 농업근로자 기숙사 건립사업 계약심사 완료      : ’23. 8.

○ 농업근로자 기숙사 착공                        : ’23. 8.

사업명

첨단농업복합단지 조성사업

담당자

농촌지원과 손다영(☎450-4043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업기술센터 이전, 과학영농시설, 신기술, 실증시험포, 농기계임대사업소     등을 집적화하여 행정 효율화

○ 신기술 확산과 특화산업 육성 등을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화를    지원하고 경영능력을 겸비한 전문인력 양성

□ 사업개요

○ 기    간: 2021년 ~ 2025년

○ 위    치: 무안군 현경면 양학리 일원

○ 규    모: 부지 210,719㎡(6.4만평), 시설 11,100㎡(건물 21동)

○ 내    용: 농업기술센터, 과학영농 기반시설, 신기술 실증시험포, 자연생태농업 체험장 등 조성(신축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 44,400백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	44,400	2,167	7,660	6,614	30,732
국 비	15,000	-	-	2,000	13,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	29,400	2,167	7,660	4,614	17,732

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

○ 기본계획 수립 및 부지 선정   : ’18. 12. ~ ’19. 7.

○ 지방재정 중앙 투자심사 통과   : ’20.  1. ~ 6.

○ 군 공유재산 관리계획 승인   : ’20.  9.  * 토지 185,702㎡

○ 군 공유재산 관리계획 승인   : ’22.  8.  * 토지 18,405㎡, 건물 11,100㎡

○ 무안군 관리계획 변경 결정   : ’21.  5. ~ ’23. 10.

○ 기본 및 실시 설계 용역 추진   : ’21. 11. ~ ’23. 10.

○ 사업 편입부지 토지매입 추진   : ’21. 12. ~ ’23. 10.

* 현재 93% 매입(’21. 12월~’23. 6월): 사유지 187,294㎡(109필지) 중 175,109㎡(97필지) 소유권 이전

* 국유지 16,762㎡ 중 7,039㎡(KAMCO)는 매각 협의완료, 9,723㎡(중앙부처)는 관리전환 협의 중 (실시계획 인가 후 매입)

○ 문화재 시굴조사 용역 추진   : ’23.  4. ~ ’23. 10.

□ 향후계획

○ 편입부지 지장물 철거공사 시행 : ’23. 6.

○ 실시계획 인가 및 공사 시행    : ’23. ~ 25.

사업명

채소류 출하조절시설 지원사업

담당자

친환경농업과 고강희(☎450-4067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수급변동이 큰 주요 채소류의 수급 및 가격안정을 위해 산지에서 상시 출하 조절 및 수익성 개선

□ 사업개요

○ 기    간: 2021 ~ 2024년

○ 위    치: 현경면 오류리 742-1외 4필지(15,290㎡)

○ 내    용: 저장시설 및 선별시설 설치(4,488㎡), 계근대 1식 등 기계장비 구입설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 9,697백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,697	-	-	3,799	5,898
국 비	2,800	-	-	1,400	1,400
시 도 비	1,015	-	-	355	660
시군구비	2,205	-	-	829	1,376
민간자본	3,677	-	-	1,215	2,462

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 0.3%)

○ 설계용역 입찰계약 및 추진(사업비 280백만원)  : ’22. 12. ~ ’23. 8.

- 건축 인허가 승인                  : ’23. 6.

- 설계용역 적정성 검토              : ’23. 5. ~ ’23. 8.

□ 향후계획

○ 공사계약 체결 요청(조달청)           : ’23. 8. ~ 10.

○ 공사추진                            : ’23. 10. ~ ’24. 2.

○ 기계장비 입찰 및 구입               : ’23. 10. ~ 12.

□ 사업계획 변경내역

사업명	항 목	사업량	사 업 비(천원)			사업량	사 업 비(천원)
			계	보조	자담		계	보조	자담
총계			9,697	6,020	3,677		11,072	6,020	5,052
‘21~22년 채소류 출하조절시설지원사업	소계		7,371	4,900	2,471		7,371	4,900	2,471
	저온창고	2,970㎡	7,136	4,744	2,392	2,996㎡	7,136	4,744	2,236
	큐어링	2룸1식	147	98	49	2룸1식	147	98	147
	계근대	50톤	25	17	8	50톤	25	17	25
	지게차	2대	63	42	21	2대	63	42	63
‘22년 채소류 출하조절 시설선별·저장인프라 지원사업	소계		1,559	700	859		1,559	700	859
	선별장	1,257㎡	1,023	459	564	1,313㎡	1,023	459	564
	사무소	175㎡	236	106	130	179㎡	236	106	130
	설계·감리		300	135	165		300	135	165
‘23년 원예생산기반 활력화사업	소계		767	420	347		953	420	533
	선별포장기	1식	199	109	90	1식	243	109	134
	철재파렛트	2,164개	568	311	257	2,164개	710	311	399
기타	설계반영		0	0	0		1,189	0	1,189

사업명

무안갯벌 탐방다리 설치공사

담당자

무안생태갯벌사업소

김도석(☎450-5642)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안황토갯벌랜드와 갯벌탐방로 종단부의 바닷길을 연결하여 관광인프라를 구축하고 갯벌도립공원 활성화를 통하여 서남해안지역의 해양관광명소를 개발하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간: 2020. ~ 2024.

○ 위    치: 무안군 해제면 유월리 ~ 현경면 가입리

○ 규    모: 탐방다리 L=1.44㎞, B=2.4m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 9,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,800	2,500	2,400	2,500	2,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,900	1,100	1,200	1,250	1,350
시군구비	4,900	1,400	1,200	1,250	1,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 45%)

○ 습지보호지역 행위 승인(해양수산부)                      : ’21.  3.

○ 일반해역이용협의(국립수산과학원, 목포지방해양수산청)           : ’21.  4.

○ 공유수면 점용‧사용 협의(무안군 해양수산과)               : ’21.  6.

○ 자연환경에 미치는 영향평가 완료(전라남도 기후생태과)   : ’21.  7.

○ 탐방다리 설치공사 1차분 착공                          : ’21. 12.

○ 해양환경 영향조사용역 착수                          : ’22.  4.

○ 탐방다리 설치공사 1차분 준공 및 2차분 착공          : ’22. 12.

○ 탐방다리 설치공사 2차분 준공 및 3차분 착공          : ’23.  6.

□ 향후계획

○ 탐방다리 설치공사 3차분 준공 및 4차분 착공          : ’24.  4.

○ 탐방다리 설치공사 4차분 및 총괄 준공                  : ’24. 10.